국 방 부 Ministry of National Defense		보 도 자 료 News Release		일련번호 : 2011-0054 전화 02)748-4567～9 FAX 02)748-4519 www.mnd.go.kr
2011.3.29. (화요일)			총 2쪽입니다
•담 당 : 국방부 주한미군기지이전사업단 홍보실 •전화 : 02) 748-4567～9
3. 29(화), 11:30시 이후 보도 바랍니다. 2 -
	미군기지 이전사업 2016년까지 이전 완료

□ 주한미군기지이전사업단(단장 김기수)은 3월 29일 평택 미군기지 이전사업

공사현장에서 출입기자단을 대상으로 기지이전사업 추진 설명회를 가졌다.

□ 미군기지이전사업은 반환부지의 효율적 활용, 주한미군의 안정적 주둔

여건 보장, 韓‧美 동맹강화에 목표를 두고 사업을 추진하여 현재 부지

조성공사 38%, 반환기지에 대한 환경오염정화사업 76%를 추진하는 등 사업이

정상 추진되고 있다.

□ 사업 완료시기는, 공사 중점관리가 필요한 주요 사업의 완료 일정을 고려해

2015년까지 공사를 하고, 준공검사와 완공시설 인계, 美측 부대이동계획

등을 고려, 2016년까지 이전키로 韓‧美간 합의했다.

□ 사업 비용은, 韓‧美가 공동으로 작성한 시설종합계획에 의거 美측이 제시한

설계기본요구서를 기초로 시설별로 각각 韓‧美 협의를 통해 개략적인

소요비용을 판단한다.

□ 협의 완료된 설계기본요구서는, 美측에서 기본설계(30%)를 실시하고 韓측에서

실시설계(70%)를 거쳐, 시설공사를 실시하고 최종적으로 美측의 검증 후

시설물을 인계한다.

□ 현재까지 판단된 건설비는, 총 소요 57개(226동) 시설 중 40개 시설에 대하여는

2010년 12월까지 협의한 비용을 산출했고, 향후 美측과 협의 예정인 17개

시설에 대해서는 旣 협의완료된 시설의 비용상승률을 적용하여 총 건설비

5조 341억원을 추산했다.

□ 건설비 추산 금액은 '04년 국회비준시 발표했던 건설비 4조 4,470억 대비

5,871억원이 증가하였으나, 이는 주로 물가상승과 韓美가 협의한 예비비

등을 반영한 것이다.

□ 현재까지 협의완료 되지 않은 잔여 17개 시설소요는, 금년 중 14개를

협의할 예정이며, 나머지 시설소요는 사업추진 일정을 고려 ‘13년까지

韓‧美 협의를 마무리 할 예정이다.

□ 지금까지 韓‧美간 협상으로 설계비 238억원, 효율적인 발주처 관리로 관리비

378억원 등 총 616억원을 절감했으며, 향후에도 건설자재 국산화 반영

지속적 확대 등으로 비용을 절감해 나갈 계획이다.

□ 아울러, 건설비 외에 국가정책 및 평택시지원특별법에 따라 평택시

지원과 반환기지 오염정화 등에 소요되는 韓측 자체 소요비용인

부지매입비와 지원비는 현재까지 1조 6,531억원을 집행했으며,

□ 집행 내역은 ▲ 부지매입비(6,946억원) ▲ 평택 이주민지원비(4,454억원),

▲ 기지외부 기반시설공사비(945억원), ▲ 반환기지 철거 및 오염정화비(2,134억원),

▲ 이주단지조성비(719억원), ▲ 공자기금예수금 이자(651억원) 등이다.

□ 기지이전을 위한 재원은 반환기지 매각대금으로 충당하고 있으며,

매각대금은 ▲ 반환부지 매각시기  ▲ 용도변경  ▲ 부동산 시세 변화 등에

따라 변동이 있을 수 있다.

□ 미군기지 이전사업을 韓ㆍ美간 긴밀히 협력하여 2016년까지

사업을 완료할 예정이다.  // 끝 //